-특약사항-

1. 계약이행증권 10%로 계약  후 7일 이내로 제출한다.

2. 선급금 요구시 선급금 보증서를 제출한다.

3. 준공시 하자보수이행증권을 잔금 수령 직전에 제출한다.

4. 공사잔금은 10%로 하며 사용승인 후 건축주와 감리자의 준공검사를  받고 미비된 공사     완료 후 14일 이내에 지급한다.

5. 일괄하도급이나 면허대여일 경우 공사중이라도 계약을 파기한다.

6.건축주가공사대금을현금으로지급하므로하도급업체에어음을지급하여서는아니되며,기성청구    시 전월 하도급업체 기성지급 서류를 제출한다.

7. 건축허가서에 명기되어 있는 건축공사에 관한 것은 설계도면과 내역에  없어도 공사비에     포함된걸로 간주한다.

8. 시공 관련 대관업무 비용은 건설사가 부담한다.

9. 공사기간이 1년 이하라서 물가변동은 적용하지 않는다

10. 공사로 인한 민원은 건설사 책임으로 한다.

11. 도면에 표기되어 있고 내역서에 품목과 수량이 누락되거나 부족한  것은 건설사 책임      으로 시공한다.

12.건축주 요구에 의해서 설계변경이나 없던 내용을 추가변경한 경우에는 수량의 증감에      따라 계약내역 단가를 적용해서 정산한다. 이 경우에는 일반관리비와 이윤은 원가계산서     비율에 따라 적용하여 정산한다.

13. 현장대리인은 현장에 상주하여 관리 감독하여야 한다.

14. 골조공사시 레미콘의 콘크리트 강도 시험을 몇회 실시하여 (기준에  근거하여) 제출한      다.

또한 각층 주요구조부 철근배근 후 간격과 본 수를 확인할 수 있는 사진을 제출한다.

15. 기계식 주차, 엘리베이터, 타일, 도기, 기타 등을 건축주 지정공사, 지급자재로 변경할      수 있다.